ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku – budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie. Informujemy, iż z uwagi na system wykonania zamówienia (,,zaprojektuj i wybuduj"), termin realizacji wskazany przez Zamawiającego jest terminem nierealnym. Same prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej zajmą co najmniej połowę wyznaczonego terminu realizacji. W związku z powyższym proszę o wydłużenie terminu realizacji o 100 dni, tak by zamówienie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. Termin na realizację zamówienia (200 dni) został wyznaczony po wcześniejszej analizie możliwości wykonawczych firm specjalistycznych oraz rozeznaniu rynku usług budowlanych. Przypomina się, że o ile do wykonania robót budowlanych będzie można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu, to do robót prefabrykacyjnych natychmiast po podpisaniu umowy i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na zaproponowane rozwiązanie. W tym czasie będzie można również realizować dostawy. Okres wykonania robót budowlanych jest trudny do oszacowania, ponieważ nie znamy potencjału poszczególnych Wykonawców, natomiast z punktu widzenia technologicznego roboty budowlane będą zawierały się w okresie od 40 do 50 dni, co wynika z analizy technologii wykonania obiektu.